10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

개별 투자심사 사업 추진현황 1

사업명

천연물 원재료 GAP/GMP 연계처리시스템 구축사업

담당자

미래혁신과 나진희

(☎860-6251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천연물 원재료(농산물 등) 세척·건조시설 및 표준화 시스템 구축

○ 기업과 농업인 계약재배로 농가소득 증대 및 기업유치로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.(3년간)

○ 위 치 : 장흥바이오식품산단

○ 규 모 : 부지 9,900㎡  건축 1,982㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	400	4,600	5,000
국 비
시 도 비	5,000	200	2,300	2,500
시군구비	5,000	200	2,300	2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

○ 업무협약 체결  : ‘19. 2.

○ 건축 설계 착수 : ‘19. 9.

○ 건축 공사 착공 : ‘20. 4.

□ 향후계획

○ 건축 및 장비 구축   : ‘20. 11.

○ 장비 시험가동(준공)  : ‘20. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모(건축면적) 변경

- (당초) 3,300㎡ → (변경) 1,982㎡

- 사유 : 부지 연약지반으로 토공사비 증가에 따른 창고면적 축소

개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명

정남진 종합스포츠타운 조성사업

담당자

스포츠산업단 최준환(☎860-6281)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군의 여러 곳에 분산된 체육시설물을 각종 스포츠대회 개최

및 다목적 이용 체육시설로 건립하여 건전한 체육활동 공간을 제공

□ 사업개요

○ 사업장소 : 장흥읍 일원

○ 사업기간 : 2020. ~ 2022.(3년간)

○ 사업내용 : 종합 스포츠타운 1동(부지 50,000㎡, 건축연면적 5,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000	-	43	500	17,457
국 비	4,800	-	-	150	4,650
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	13,200	-	43	350	12,807
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 타당성조사 연구 용역 완료

○ 군 관리계획 결정 용역 일상감사 및 계약심사 완료

□ 향후계획

○ 군 관리계획 결정 용역 추진

○ 환경 및 재해영향평가 용역 추진

○ 실시설계용역 및 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 3

사업명

(옛)장흥교도소를 활용한 문화예술 복합공간 조성사업

담당자

문화관광과 전길수(☎860-5764)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기능이 정지된 유휴시설을 리모델링하여 통합적 문화공간으로 조성

○ 유휴공간을 문화예술 공간으로 재창조하여 지역예술인, 주민에게 문화향유       기회 확대 및 지역 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ’20. ~ ’24.(5년간)

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 원도리 264-2번지 외

○ 규 모 : 토지 39,995㎡, 건물 8,245㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,300			2,600	7,700
국 비	5,150			1,300	3,850
시 도 비
시군구비	5,150			1,300	3,850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 문화예술 복합공간 조성계획 수립                : ’17. 11.

○ 기본구상 및 타당성 검토 연구용역 시행          : ’18. 3. ~ 10.

○ 국유재산 매매계약 체결 및 소유권 이전등기     : ’19. 2.

○ 2020년 문체부 소관사업 신청                   : ’19. 2.

○ 2020년 폐산업시설 문화재생사업 확정            : ’19. 9.

○ (옛)장흥교도소 내 수목정비 사업 완료            : ’20. 2.

○ 정밀안전진단 실시 완료                         : ’20. 3. ~ 5.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 승인신청            : ’20. 5. ~ 7.

□ 향후계획

○ (옛)장흥교도소 시설 기록보존(아카이브)용역       : ’20. 7. ~10

○ 공모 실시설계 사업자 선정(협상에 의한 계약)     : ’20. 9. ~

○ 문화·예술 복합공간 조성사업 추진               : ’21. 1. ~

개별 투자심사 사업 추진현황 4

사업명

회령진성 복원 정비사업

담당자

문화관광과 백형중(☎860-5762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남의 이순신 자원을 역사 및 관광자원으로 활용하여 지역경제 활성화

및 역사의식 고취 기여

□ 사업개요

○ 기 간 :  ’18. ~ ’24.(7년간)

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 회진면 회진리 1755번지 일원

○ 규 모 : 62,810㎡ / 추정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,500	555	75	128	12,742
국 비	7,645				7,645
시 도 비
시군구비	5,855	555	75	128	5,097
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 성벽 시굴조사 용역                               : ’17. 3. 24.

○ 회령진성 복원정비에 따른 공유재산 군의회 승인    : ’17. 9.  4.

○ 편입토지(물건포함) 협의 및 보상비 지급             : ’18. 2. ~ ’19. 1.

○ 지방재정투자심사 완료 (적정)                      : ’19. 3. 25.

○ 회령진성 복원정비를 위한 시·발굴조사 완료         : ’20. 6.

□ 향후계획

○ 성곽복원 실시설계 용역 추진 : '21. 1.

○ 사업추진을 위한 문화재 현상변경 등 관련 협의 :'21. 7.

개별 투자심사 사업 추진현황 5

사업명

읍면 마을방송시스템 구축

담당자

총무과 노흥섭(☎860-5612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오ㆍ벽지 마을 지역 등 마을이 여러 지역으로 분산되어 있어 신속한 마을

방송 미실시로 이장들이 주민들에게 재 안내 하는 등 애로점 발생

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3년간)

○ 위 치 : 9읍면 262행정리

○ 규 모 : 무선주장비 및 무선수신기, 송ㆍ수신 안테나 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,428백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,428	623	2,805	-	-
국 비				-	-
시 도 비	100	100		-	-
시군구비	3,328	523	2,805	-	-
지 방 채				-	-
민간자본				-	-
기 타				-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘17. 1월 ~ ’18. 9월 / 52마을 / 623백만원

○ ‘18. 10월 ~ ‘19. 5월 / 4개 읍면(대덕, 장동, 장평, 회진) / 866백만원

○ ‘19. 3월 ~ 8월 / 3개 읍면(관산, 용산, 안양) / 942백만원

○ ‘19. 10월 ~ 12월 / 본청 및 2개 읍면(장흥, 부산) / 997백만원

- 본청, 2개읍면(장흥, 부산), 유치면 동보장비, 기 설치마을 음영지역 보강 등

※ 군 → 읍ㆍ면 → 본 마을 → 자연부락 간 일괄방송 구축 완료

□ 향후계획

○ 마을방송시스템 구축에 따른 원활한 유지관리 및 마을 보강 설치 등

개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명

회진시장 시설현대화사업

담당자

지역경제과 김규표(☎860-5903)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시장 점포가 강풍에 취약한 조립식 패널로 지어져 있어 재해에 취약하고,

건축이후 20여년이 경과하여 유지보수 한계에 도달함

○ 바다와 접하고 있는 강점을 살려 수산물 시장과 지역 농·축·특산물을 활용한

특성화 시장으로 조성함으로써 전통시장의 새로운 활로 개척 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022년

○ 위 치 : 장흥군 회진면 회진중앙길 9-13 일원

○ 규 모 : 건축철거(600.9㎡) 후 재건축 1식(수산물센터, 비가림시설 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000				2,000
국 비	1,200				1,200
시 도 비
시군구비	800				800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2021년 회진시장 시설현대화사업 신청     : ’20.  4. 22.

□ 향후계획

○ 2021년 회진시장 시설현대화사업 선정     : ’20. 8.

○ 2021년 회진시장 시설현대화사업 재원협의 : ’20. 8. ~ 12.

○ 회진시장 기본계획 및 실시설계 용역      : ’21. 1. ~ 6.

○ 회진시장 시설현대화사업 신축공사 추진   : ’21. 7. ~ ’22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명

군계획도로(중로1-3호선) 개설공사

담당자

건설도시과 조효진(☎860-6142)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코아루APT(374세대), 미르채APT(210세대)등 대단지 아파트 입주로

인한 교통량 증가로 출퇴근 교통체증 해소에 기여

○ 장흥읍 군계획도로 개설 사업을 통하여 교통사고 예방과 도심주민의

생활 편익 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.12.26. ~ 2021.12.14

○ 위 치 : 장흥읍 오얏리돌솥밥 ~ 장흥고 삼거리

○ 규 모 : 군계획도로 개설 L=670m(B=20m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,907     백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비	500	500
시 도 비
시군구비	3,407	2,137			1,270
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 부채도로 개설 및 부채도로 옹벽 시공 완료

○ 전구간 토공 작업 및 흙막이 CIP공법 계획중

□ 향후계획

○ 총 3차분으로 사업추진을 계획하고 있으며, 1차분 2차분은 기발주 되었고       3차분은 내년 본예산에 예산을 확보하여 추진 예정

○ 1차분, 2차분에서 전 구간 토공 및 주요 옹벽 시공을 마무리 하고 3차분에       전체구간 아스콘 포장을 하여 준공기한 2021.12월 전에 개통을 목표로        하고 있음.

개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명

2019 대한민국 산림문화 박람회

담당자

산림휴양과 곽광호(☎860-6073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥군 산림·문화자원의 수수성을 전국에 알리고, 임산업 경쟁력강화와

지역 경제 활성화에 기여하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 11. ~ 2019. 10. 20.

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 탐진강변 및 편백숲 우드랜드 일원

○ 규 모 : 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,000		1,000
국 비
시 도 비	500		500
시군구비	500		500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 박람회 개최 : 2019. 10. 11. ~ 10. 20.

○ 정산 완료 : 2019. 12. 31.

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명

김 육상채묘 및 냉동망 보관시설

담당자

해양수산과 박한음(☎860-6001)

□ 사업목적 및 필요성

○ 김 양식 초기 갯병 예방 및 해적생물 구제로 양식기간 연장과 품질 향상 을        통한 김양식 산업의 안정화 및 어업인 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 6월 ~ 2020년 12월

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 고마리

○ 규 모 : 1개소(연면적 2,176.56㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계		-	-	2,000
국 비	1,000			1,000	-
시 도 비
시군구비	600			600	-
지 방 채
민간자본	400			400	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ (현 공정율 50%) 1회 기성금 지급을 위한 서류검토 중

□ 향후계획

○ 1회 기성급 지급 : 2020. 08. 31. 한

○ 사업 준공       : 2020. 11. 30. 한

개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명

미이용 산림자원화센터 조성

담당자

산림휴양과 이민지

(☎860-6111)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벌채 후 임지에 남아 있는 벌채 부산물로 인해 산림재해 발생 위험            증가와 경관저해 및 조림사업 지장 등 초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020 (2년간)

○ 위 치 : 장흥군 용산면 어산리 산50-6

○ 규 모 : 19,596㎡(5,928평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000		3,000
국 비	1,500		1,500
시 도 비
시군구비	600		600
지 방 채
민간자본	900		900
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 토목공사(벌채, 평탄작업, 기반정비 등)          : 2020. 6. ~ 7.

□ 향후계획

○ 기계장비(고정식·이동식 파쇄기 등) 구입        : 2020. 7 ~ 10.

○ 건축·전기·소방·통신 공사                      : 2020. 8 ~ 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 연장 (1차) 및 보조금 이월 승인       : 2019. 12. 19.

- 당초) 2019. 12. 31.까지 → 변경) 2020. 6. 30.까지

○ 사업기간 연장 (2차) 및 사업명 변경 승인        : 2020. 6. 16.

- 당초) 2020.  6. 30.까지 (수목부산물유용자원화센터 조성사업)

- 변경) 2020. 12. 31.까지 (미이용 산림자원화센터 조성사업)

개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명

농업기술센터 청사이전 건립

담당자

농업기술센터 이장환

(☎860-6503)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 센터 건물 노후화(1984년 건축, 35년 경과) 및 부지협소

○ 고층아파트 입주, 실증포 협소와 함께 그늘 발생 등으로 관내 농업인

현장 견학 및 교육장 활용 미흡

○ 농업기술센터 청사를 확장 이전하여 급변하는 농업환경 변화에 적기 대응하고

고소득 작물 시범사업 및 개발 보급 등으로 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.(3년간)

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 행원리 776번지 일원

○ 규 모 : 부지 16,242㎡, 건축면적 1,500㎡(본관동 1,000, 부속건물 500)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,400	-	-	2,400	9,000
국 비	4,500	-	-	-	4,500
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,900	-	-	2,400	4,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: - %)

○ 농업기술센터 청사 신축계획 수립              : ’19. 1.

○ 전라남도 지방재정투자심사 승인               : ’19. 10.

○ 청사 신축부지 공유재산 관리계획 승인         : ‘20. 3.

○ 청사 신축부지 매입                           : ’20. 6.

○ 군관리계획(용도지역 공공청사) 결정(변경) 용역 : ’20. 7. ~ ’21. 1.

□ 향후계획

○ 청사 신축 기본계획 및 실시 설계용역 : ’20. 9. ~ ’21. 2.

○ 청사 신축공사 추진  : ‘21. 3. ~ 12.

개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명

화장품 천연오일 원료추출 및 표준화기반구축 사업

담당자

미래혁신과 나진희

(☎860-6251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수입에 의존하는 화장품 원료 국산화 기반구축으로 천연화장품 제조산업

해외시장 진출을 통한 고부가가치 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.(3년간)

○ 위 치 : 장흥바이오식품산단

○ 규 모 : 부지 9,900㎡  건축 3,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000			1,000	9,000
국 비
시 도 비	5,000			500	4,500
시군구비	5,000			500	4,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 업무협약 체결                     : ‘20. 2.

○ 건축 설계 및 국제규격 컨설팅 용역 : ‘20. 6. ~ 12.

□ 향후계획

○ 건축 및 장비 구축                 : ‘21. 1 ~ ’22. 6.

○ 국제규격 인증 및 시험가동(준공)    : ‘22. 7. ~ 10.

개별 투자심사 사업 추진현황 13

사업명

역사 향기숲 테마공원 조성

담당자

산림휴양과 곽광호(☎860-6073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 예양공원을 재창출하여 지역민과 토요시장을 찾는 관광객들에게

편익 제공 및 지역 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 남동리 근린예양공원 일원

○ 규 모 : 7.0ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000			1,200	8,800
국 비
시 도 비	5,000			600	4,400
시군구비	5,000			600	4,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 전남형 지역성장 전략사업 선정 : 2019. 9. 18.

○ 군관리계획(변경)결정 및 실시설계 용역 : 2020. 7. 28. ~ 2021. 4. 23.

□ 향후계획

○ 문화재현상변경 추진 : 2020. 9. ~ 12.

○ 국·군유림 교환 : 2020. 10. ~ 2021. 3.

○ 사업착공 및 준공 : 2021. 6. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투자심사 사업 추진현황 14

사업명

전남도립대학교 장흥캠퍼스 소유권 이전

담당자

재무과 김경만(☎860-5741)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1999년 개교한 전남도립대 장흥캠퍼스는 2004년 담양캠퍼스로 통합되면서

현재까지 학교용지로 활용하지 않음

○ 장흥캠퍼스를 다시 장흥군으로 무상 양여하여 군민들의 건강 휴양공간과

관광인프라 구축 등 다양한 용도로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 안양면 기산리 산 89번지 등 10필지

○ 토    지 : 222,535㎡ / 도 소유 212,668(5필지), 군 소유 9,867(5필지)

○ 건    물 : 20,897㎡ / 본관 5,544, 후관 9,665, 기숙사 2,869, 연구시설 등 2,819

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	0	0	0	10,000
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	10,000	-	-	-	10,000
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 장흥캠퍼스 소유권 이전 건의(장흥군→도립대) : 2019. 2월

○ 도지사 도민과의 대화 시 건의(TF운영 지시)     : 2019. 3월

○ 교육부장관 면담 및 건의                     : 2019. 7월

○ 행․재정적 절차를 위한 위원회 개최(도립대)   : 2019. 8.~9월

○ 공유재산 심의회 심의 및 군의회 관리계획 승인 : 2019. 11.~12월

○ 지방재정 투자심사 완료(군자체 심사)          : 2019. 12월

○ 관계기관(기재부, 교육부, 도립대) 문제점 협의  : 2020. 1.~3월

○ 문제점 보고 및 우리군 최종방안 결정(중장기 과제) : 2020. 4월

□ 향후계획

○ 내용연수 경과 후 매입 검토 또는 무상양여 등 중장기과제 추진

※ 보조금법 및 국고보조금 통합관리지침

- 보조금을 국가에 반환 또는 내용연수(40년)까지 재산처분 제한

개별 투자심사 사업 추진현황 15

사업명

군민회관 신축 이전 부지 매입

담당자

재무과 김경만(☎860-5741)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역민들이 세미나, 연찬회, 단체교육, 피로연 등 가장 많이 이용하고

있는 건물로 1988년(32년 경과) 건축되어 노후화 진행

○ 복합적인 문화시설로 자유롭게 활용할 수 있는 쉼터와 휴게공간으로 신축

□ 사업개요

○ 매입대상 : 장흥읍 건산리 210-1번지 등 7필지, 면적 12,374㎡

○ 소요예산 : 5,400백만원(군비)

※ 현 군민회관 현황 : 1988년 신축(32년 경과), 대지면적 4,370㎡

- 안전등급 : 보통(C등급) / 주요부재 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수 필요

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,400	0	0	0	5,400
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	5,400	-	-	-	5,400
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 군민회관 이전 부지 매입계획(안) 수립   : 2019.  8월

○ 공유재산 심의 및 관리계획 군의회 승인  : 2019. 10월

○ 지방재정 투자심사 완료(군 자체심사)     : 2019. 12월

○ 매입대상 토지소유자 면담 및 설득       : 2020.  1. ~ 6월

□ 향후계획

○ 예산 확보 및 토지 매입 : 2021년 이후

개별 투자심사 사업 추진현황 16

사업명

장애인시설 복합단지 조성

담당자

주민복지과 조정현

(☎860-58310)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 소유 건물 무상임대 중이던 장애인단체 사무실 및 작업장 철거에 따른 대체 공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 장흥읍 건산리 578-1

○ 규 모 : 부지면적 3,610㎡, 시설면적 991㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	-	1,433	1,210	2,857
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	-	1,433	1,210	2,857
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 부지 및 건물 매입             : 2019. 11.

□ 향후계획

○ 매입건물 리모델링 및 임시이주 : 2020. 02.

○ 부지 추가확보                 : 2020. 12.

○ 건물 신축 및 이주             : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 17

사업명

장흥군 보훈 및 행정복지타운 건립

담당자

주민복지과

손이산(☎860-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현. 보훈단체 사무실이 군민회관 & 안보회관 등 타 시설에 각 4개 단체씩 입주해 있어 단체간 소통과 업무 추진의 효율성 감소와 각종 행사 시 타 시설 대관 사용의 문제를 해결하고 보훈가족의 종합 복지공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 10월 ~ 2021년 12월

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 건산리 211-1

○ 규 모 : 건축면적 900㎡(3층) / 부지면적 2,091㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500		844		2,656
국 비	500				500
시 도 비
시군구비	3,000		844		2,156
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 부지매입 : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 공유재산 심의 및 관리계획 : 2020. 09.

○ 실시설계 용역 추진 : 2020. 10. ~

○ 보훈회관 건립 공사 : 2021. 01. ~

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 18

사업명

어류부산물 활용 친환경 배합사료 공장건립

담당자

해양수산과 정지아(☎860-6011)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어류 등 수산부산물과 지역특산품을 활용하여 친환경 배합사료 개발을        통한 양식어가의 생산비 부담 경감 및 안정적인 어가 소득기반 구축

○ 생사료 사용으로 인한 해양환경오염 방지 및 친환경적 고효율사료 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020(2개년)

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 해당리 669-4

○ 규 모 : 부지 3,300㎡(1,000평), 연면적 2,545㎡(약 770평) / 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	-	200	3,800	-
국 비	2,000	-	-	2,000	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	-	1,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	800	-	200	600	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기계설비 제작 30%)

○ 사업자 선정                                           : 2019. 01. 31.

○ 보조금 교부결정(1차)                                    : 2019. 12. 10.

○ 건축설계 및 기계설비 계약체결, 기계제작 착공           : 2020. 03. 10.

○ 보조금 교부결정(2차)                                   : 2020. 07. 30.

□ 향후계획

○ 건축·전기·소방·통신시공업체 선정                       : 2020. 08. 14.

○ 공사 착공                                             : 2020. 08. 20.

○ 공사 준공                                              : 2020. 12. 30.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황 19

사업명

노후어업지도선 대체 건조

담당자

해양수산과 문하현(☎860-6002)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어업지도선 노후화(선령21년)에 따른 잦은 기관고장으로 안정적인 행행 및 업무수행 곤란

○ 최근어선의 대형화 및 현대화로 어업지도선 업무수행 능력 한계

○ 해난사고 예방 및 구조 활동 등 긴급 상태 발생 시 신속대처 미흡

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 6월(18년)

○ 위 치 : 전남 장흥군 회진면 2188-3일원(회진항)

○ 규 모 : 어업지도선 신규건조 1척(알루미늄 20톤)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0 %)

○ 2019년 추경3회 지방의회예산심의 부결

□ 향후계획

○ 어업지도선 대체 신규건조 계획 수립 : 2021. 01. 한

※ 친환경선박법(2020.1.1.시행)에 따른 하이브리드 또는 전기추진선 계획 수립